(주)  성   록

시  방  서

1. 적 용 범 위

이 시방서는 경질 단풍나무를 사용하여 이중장선 공법으로 시공하는

체육관,경기장, 강당등의 마루 공사에 적용한다.

2. 일 반 사 항

2-1   플로어링 설치하기 전의 건물은 건조상태로 외기와 차단되어 있어야 한다.

2-2   시공 전 목재 및 플로어링은 감독원에게 견본품을 제출하여 재질 및 형상,색상,

무늬등에 관하여 승인을 받아야 한다.

2-3   치장재의 단면상 표시된 치수는 다듬어 놓은 마감치수로 한다.

2-4   하부 구조목재는 건조재로 비로 손상되지 않게 지면 또는 습기찬 물체에 접하지

않게 하여야 한다.

2-5   마무리 공법 및 각종 치수는 도면 상세에 의하여 기타사항은 전문업체 사양 및

건축표준 시방서를 기준으로 한다.

* 특기 사항 :  기존 마루 철거 후 바닥 습기 누출시 반드시 방수처리후 시공토록 해야하며

방수작업은 시행사및 주관사에서 시행한다.

3.사용재료

구 분	재 질 및 형 상	비 고
플 로 링 재	수 종 : 경질단풍나무 표면처리 : UV도장완제품 규 격 : 경질단풍나무 22*60*2400	함수율 : 8±5%
큐션레벨 조절 볼트	큐션고무 : T20*90*90 , 경도 55	@600×400 재생고무 사용불가
	조절볼트 : 강화플라스틱Ø90*H60	조절높이 H50㎜
구 조 재	수 종 : 미송(외송) 각재 규 격 : 장선 60×40×@300 멍에 60×40×@400	함수율 15±5%(증기건조) 목재용방부 또는 동등 이상으로 현장방부 (롤러 또는 스프레이)
특 기 사 항	멍에, 장선은 마감치수로하고 기타 구조재는 제재치수로 한다.

4. 시    공

4-1 바닥은 필히 방습처리하고 방습필름(0.08㎜)을 20cm이상 서로 겹치게 한다.

4-2 합판은 T12㎜내수 합판으로 시공한다.

4-3 플로어링과  양벽과의 사이뛰움은 20～30㎜로 한다.

4-4 플로어링은 폭500㎜당 1.5～2.5㎜ 띄움으로 시공한다.

4-5 합판과 플로어링은 2(inch)이상의 파워 못으로 시공한다.

4-6 자재는 현장적응을 위하여 7일 전에 반입되어야 하며 현장조건은 온도 7～20℃

습도는 40～60%로 유지 하여야 한다.

5. 시공 자격 요건

체육관의 플로어링 공사는 등록된 전문 건설업체가 공사를 하여야 하며,

충분한 시공 경험이 있는 전문업체가 시공하여야 한다.

6. 기     타

기타 특수한 시공사항 또는 변경사항이 있을시 감독관의 지시에 따르며

재료는 기존의 동등이상의 품질을 사용토록하며 이 경우

감독관 / 발주처와 사전 협의를 거친다.

T E L  : 053)  766 - 5511

F A X  : 053)  766 - 5513